10-1		월미도 해상스카이워크 조성 및 주차장 조성 (월미도 해상스카이워크 조성)

구분	달성기간	사업주체	예산구분	총예산액 (백만원)
계속	임기외	구	예산	5,800

주관부서 (협조부서)	건설과	부서장 박노섭(7039)	담 당 이규철(7451)	담당자 박준형(7455)

□ 공약목표

❍ 기 조성한 월미도 문화의 거리 친수공간과 연계하여 친수공간을 추가 확장하여 수도권을 대표하는 국제적 수준의 해안 친수공간 조성으로 관광사업 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

❍ 추진기간 : 2022년 ~ 2026년

❍ 소요예산 : 5,800백만원(시비50%, 구비50%)

※ 추후 기본 및 타당성 디자인 용역 후 개략사업비 산정 및 실시설계 용역 완료 후 정확한 사업비 산정

❍ 재원조달방안 : 기본 및 실시설계 완료 후 국·시비 및 공모 신청

❍ 주요내용 : 월미문화로 ~ 해안 공유수면 해상보행데크 조성 1식

- 해상교량, 포토존(인천대교, 영종대교, 영종국제도시), 전망시설 등

- 국립인천해양박물관, 인천상륙작전 역사적 현장에 대한 스토리텔링      등 연계 시설

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
계	5,800	50	150	300	3,000	2,300
국비
시비	2,900			150	1,500	1,250
구비	2,900	50	150	150	1,500	1,050
기타

□ 연도별 추진계획

기간	추진계획	목표 이행률
2022년 하반기	• 해상스카이워크 기본구상 디자인 용역 추진 • 지방재정투자사업 심사	10%
2023년	• 월미도 해상스카이워크 기본계획 수립 • 환경영향평가용역 추진(일반 해역이용협의) • 공유수면 점 · 사용허가 사전 협의 등	45%
2024년	• 기본 및 실시설계 추진 • 각종 행정절차, 유관기관 협의 완료	80%
2025년	• 공사 착공	90%
2026년	• 공사 준공	100%

□ 타기관과의 협조사항

❍ 각종 사전절차(공유수면 점·사용허가, 해역이용협의 등) 이행 후 사업비(시비) 지원 협조

❍ 국립해양박물관(해양수산부), 市 해양친수과 등 사업 추진 협조

□ 문제점

❍ 해양수산부(인천지방해양수산청)로부터 공유수면 매립면허를 받고 허가까지 상당한 기간 소요(3~4년 이상)

❍ 친수공간 시설 매립으로 하는 경우 막대한 사업비(350억원 이상) 소요

❍「연안관리법」에 따른“연안정비사업”에 해당하지 않아 국·시비 지원 대상에서 제외되어 순수 구비로 추진

□ 대책

❍ 친수공간 확대 사업은 300억원 이상의 막대한 예산이 투입되는 사업으로 구 재정에 막대한 영향과 행정절차 이행에 상당한 시일이 소요됨.

❍ 이에, 보행자전용도로 및 친수시설을 연계하는 해상스카이워크 조성사업(변경)으로 인천의 대표적인 관광도시로써 차별화된 복합 해양관광지로 거듭나고자 함.

□ 기대효과

❍ 어느 지역에서도 볼 수 없는 바다위에서 아름다운 해양풍경, 인천대교 및 영종대교 뷰, 월미도 뷰 등 고 퀄리티 관광인프라 구축

❍ 인천상륙작전 격전지에 대한 역사적 현장을 스토리텔링하여 역사성이 가득하고, 국립인천해양박물관과 연계한 관광인프라 구축