11-2		영종국제도시 문화, 복지, 체육센터 건립 및 확충 (문화센터 확충)

구분	달성기간	사업주체	예산구분	총예산액 (백만원)
신규	임기외	자체	예산	41,251

주관부서 (협조부서)	문화관광과	부서장 조정희(6441)	담 당 이미란(6442)	담당자 신현수(6444)

□ 공약목표

❍ 영종국제도시 내 문화활동 및 휴식공간 제공을 위한 문화회관 건립(공사착공)

□ 개    요

❍ 사업기간 : 2022. 9. ~ 2028. 12.

❍ 위    치 : 중산동 1914-3대(문화시설 용지)

❍ 총사업비 : 41,251백만원

❍ 규    모(안)

- 부지면적 : 6,868.1㎡

- 연 면 적 : 8,000㎡

- 층    수 : 지하1층 / 지상3층

- 주요시설 : 공연장, 전시실, 다목적실 등

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
계	41,251	-	50	10,131	1,150	29,920	-
국비	-	-	-	-	-	-	-
시비	9,336	-	-	-	-	9,336	-
구비	31,915	-	50	10,131	1,150	20,584	-
기타	-	-	-	-	-	-	-

□ 연도별 추진계획

기간	추진계획	목표 이행률
2022년 하반기	• 대상부지 검토	5%
2023년	• 기본구상 및 부지매입 계획 수립 • 타당성 검토용역 수행	20%
2024년	• 행정절차 이행 (중기지방재정계획 수립, 공유재산관리계획, 지방재정 투자 심사 등)	30%
2025년	• 기본 및 실시설계	40%
2026년	• 공사착공	100%

□ 문제점 및 대책

❍ 총 공사비의 30%를 제외한 31,915백만원을 구비로 진행해야 함에 따라 예산확보의 어려움이 있음

❍ 추가 재원 확보 가능 지속 확인 및 협조 요청

□ 기대효과

❍ 영종국제도시 내 주민의 문화활동 및 휴식공간 제공을 통한 주민의 문화 향유 기회 확대