12-2		영종·용유지역 생활기반시설 확충(상수도)

구분	달성기간	사업주체	예산구분	총예산액 (백만원)
계속	임기내	시	예산	2,827

주관부서 (협조부서)	기반시설과	부서장 임청환(7712)	담 당 김성남(8851)	담당자 황태우(8853)

□ 공약목표

❍ 영종·용유지역 생활기반시설(상수도) 확충

□ 개    요

❍ 추진기간 : 2019. 5월 ~ 2023. 12월

❍ 소요예산 : 2,827백만원(국비 1,063 / 시비 1,764)

❍ 주요내용

- 무의지역 전체 지역의 지방수도 3단계 공급계획에 따라 23년 12월 완료 계획으로 영종·용유지역 상수도 시설 구축

	< 무의지역 지방상수도 공급사업 >
- 1단계 : 큰무리마을~실미도 해수욕장 L=1,621m (준공/급수) - 2단계 : 무의배수지~하나개삼거리 L=2,738m (준공/급수) - 3단계 : 하나개삼거리~소무의도/하나개해수욕장 L=4km · 사 업 비 : 2,827백만원 (國 1,063 / 市 1,764) ※ 1, 2단계: 1,519백만원(국․시비) / 3단계: 1,308백만원(시비)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022이전	2022	2023	2024	2025	임기후
계	2,827	2,827
국비	1,063	1,063
시비	1,764	1,764
구비
기타

□ 연도별 추진계획

기간	추진계획	목표 이행률
2022년 하반기	• 2022. 7월 : 3단계(경제청 도로개설구간) 공사 착공 - 하나개삼거리~광명항간 L=2km (경제청 도로개설구간) - 하나개삼거리~하나개해수욕장간 L=1km (경제청 도로개설구간) • 2022. 하반기 : 3단계(소무의도일원 1.0km) 공사 착공	70%
2023년	• 2023. 12월 : 3단계(무의지역 전체) 지방상수도 공급	100%

□ 타기관과의 협조사항

❍ 해당 없음

□ 문제점 및 대책

❍ 무의지역 지방상수도 공급사업은 경제청의 무의도 내 도로개설사업과 연계되어 추진되는 사업으로, 도로개설사업 지연 시 상수도 공급사업도 지연됨.

❍ 따라서, 우리 구로 협조하는 행정사항에 대하여 적극 지원

□ 기대효과

❍ 영종·용유 지역 주민에게 수돗물을 안정적으로 공급