12-3		영종·용유지역 생활기반시설 확충(하수도)

구분	달성기간	사업주체	예산구분	총예산액 (백만원)
신규	임기외	자체	예산	185,054

주관부서 (협조부서)	기반시설과	부서장 임청환(7712)	담 당 김진홍(7726)	담당자 이주영(7728)

□ 공약목표

❍ 영종·용유지역 생활기반시설(하수도) 확충

□ 개    요

❍ 추진기간 : 2022년 ~ 2030년

❍ 소요예산 : 185,054백만원

❍ 재원조달방안 : 국비 55,516 / 시비 92,527 / 구비 37,011

❍ 주요내용

- 영종·용유 하수 미처리구역 내 하수관로 74,353m, 중계펌프장 32개소 신설

· 영종 : 하수관로 47,148m, 중계펌프장 17개소

· 용유 : 하수관로 27,205m, 중계펌프장 15개소

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
계	185,054		300	2,000	18,200	36,000	128,554
국비	55,516			600	5,460	10,800	38,656
시비	92,527			1,000	9,100	18,000	64,427
구비	37,011		300	400	3,640	7,200	25,471
기타

□ 연도별 추진계획

기간	추진계획	목표 이행률
2023년	• 용유 공공오수이송시설 설치공사 기본 및 실시설계 용역(경제청) • 영종·용유지역 공공하수도 확충사업 기본설계 용역(구)	5%
2024년	• 용유지역 공공오수이송시설 설치공사 착공(경제청) • 영종·용유지역 공공하수도 확충사업 실시설계 용역(구) • 영종·용유지역 공공하수도 확충사업 국고보조금 신청(구→시→환경부) • 영종·용유지역 공공하수도 확충사업 국고보조금 확정 내시(환경부→시→구)	10%
2025년	• 용유지역 공공오수이송시설 설치공사 준공(경제청) • 영종·용유지역 공공하수 확충사업 착공(구)	20%
2026년 상반기	• 영종·용유지역 공공하수 확충사업 추진	25%

□ 타기관과의 협조사항

❍ 용유지역 공공하수도 확충사업은 현재 경제청에서 추진중인 「용유 공공오수이송시설 설치공사」완료 후 국고보조금 신청 가능

❍ 영종·용유지역 공공하수 확충사업은 국비, 시비 보조사업으로 환경부와 시의 보조금 지원 필요

□ 문제점 및 대책

❍ 하수도 정비사업은 막대한 사업비가 소요되는 장기적인 사업으로 재원 조달을 위한 환경부 국비 보조사업 선정 및 단계별 사업비 투자 필요

□ 기대효과

❍ 영종용유 지역의 발생 하수를 하수처리시설에서 처리하여 하수도의 효율적인 관리와 공중위생 향상에 기여