12-4		영종·용유지역 생활기반시설 확충(도로)

구분	달성기간	사업주체	예산구분	총예산액 (백만원)
계속	임기내	자체	예산	68,959

주관부서 (협조부서)	기반시설과	부서장 임청환(7712)	담 당 박영문(8951) 김성남(8851)	담당자 강찬욱(8952)

□ 공약목표

❍ 영종국제도시 미개발지역의 열악한 생활기반시설(도로) 개선 및 확충을 통한 상생하는 균형도시 구현

□ 개    요

(2022. 7. 31. 기준)

구 분		사업명	위 치	사업개요	사업기간	사업비 (백만원)	비 고 (추진률:75%)
영종지역	1	영종 소1-4호선(2차) 도로개설공사	운북동 560-4 ~ 운북동 30-185	L = 2,213m B = 9.5m	2017년 ~ 2022년	15,609	공사중
	2	잔다리 ~ 영종역 입구간도로개설공사	운남동 612-2번지 ~ 운북동 산161-6	L = 900m B = 15m	2018년 ~ 2022년	13,400	공사중
	3	중촌경로당 진입도로개설공사	중산동 1406-3 ~ 중산동 1436-6	L = 439m B = 12m	2018년 ~ 2022년	4,200	공사중
	4	하늘어린이집 진입도로개설공사	운남동 440-8 ~ 운남동 512-2	L = 365m B = 6m	2019년 ~ 2022년	2,500	공사중
	5	중촌교차로~백운로 도로개설공사	중산동 1402-1 ~ 중산동 산201-5	L = 304m B = 12m	2021년 ~ 2023년	2,600	실시계획인가(변경)신청
	6	전소교~하늘도시(송산)간 도로개설공사	운남동 169-11 ~ 운남동 170-5	L = 389m B = 10m	2022년 ~ 2024년	1,800	실시설계 중
	7	마당개 진입도로 개설공사	중산동 1850-398 ~ 중산동 1165-6	L = 973m B = 10m	2022년 ~ 2024년	5,400	실시설계 중
용유지역	8	무의도 관광기반시설(도로)조성사업	무의동 297-21~ 648-2,무의동 563~517	L=1,141m B=4~10m	2018년 ~ 2023년	8,750	보상중
	9	용유로~마시안해변 간 도로개설공사	덕교동 331-1 ~ 덕교동 662-23	L=681m B=10m	2018년 ~ 2023년	4,600	보상중
	10	덕교동 진입도로 개설공사	덕교동 150-3 ~ 덕교동 산77-7	L=488m B=12m	2019년 ~ 2023년	5,000	설계중
	11	왕산해수욕장 해변도로 개설공사	을왕동 808-28 ~ 을왕동 810-256	L=596m B=7~8m	2021년 ~ 2023년	3,200	설계중
	12	을왕리해수욕장 해변도로개설공사	을왕동 721-32 ~ 을왕동 733-24	L=786m B=8m	2017년 ~ 2023년	1,900	1단계공사완료

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	구 분	계	2022 이전	2022	2023	2024	2025	2026 이후
계		68,959	55,409	6,650	5,000	1,900	-	-
구분	국 비	7,000	7,000	-	-	-	-	-
	시 비	28,525	22,025	2,900	2,500	1,100	-	-
	구 비	33,434	26,384	3,750	2,500	800	-	-
소1-4호선 (2차)	소계	15,609	15,609	-	-	-	-	-
	시비	7,400	7,400	-	-	-	-	-
	구비	8,209	8,209	-	-	-	-	-
잔다리~ 영종역	소계	13,400	12,800	600	-	-	-	-
	시비	6,500	6,500	-	-	-	-	-
	구비	6,900	6,300	600	-	-	-	-
중촌경로당 진입도로	소계	4,200	4,100	100	-	-	-	-
	시비	1,800	1,800	-	-	-	-	-
	구비	2,400	2,300	100	-	-	-	-
하늘어린이집 진입도로	소계	2,500	2,500	-	-	-	-	-
	시비	1,000	1,000	-	-	-	-	-
	구비	1,500	1,500	-	-	-	-	-
중촌교차로 ~백운로	소계	2,600	50	2,550	-	-	-	-
	시비	1,300	-	1,300	-	-	-	-
	구비	1,300	50	1,250	-	-	-	-
전소교~ 하늘도시	소계	1,800	-	100	1,000	700	-	-
	시비	900	-	-	500	400	-	-
	구비	900	-	100	500	300	-	-
마당개 진입도로	소계	5,400	-	200	4,000	1,200	-	-
	시비	2,700	-	-	2,000	700	-	-
	구비	2,700	-	200	2,000	500	-	-
무의도 관광 기반시설	소계	8,750	8,750	-	-	-	-	-
	국비	7,000	7,000	-	-	-	-	-
	시비	525	525	-	-	-	-	-
	구 비	1,225	1,225	-	-	-	-	-
용유로~ 마시안 해변	소계	4,600	4,600	-	-	-	-	-
	시비	2,300	2,300	-	-	-	-	-
	구비	2,300	2,300	-	-	-	-	-
덕교동 진입도로	소계	5,000	5,000	-	-	-	-	-
	시비	2,500	2,500	-	-	-	-	-
	구비	2,500	2,500	-	-	-	-	-
왕산 해수욕장	소계	3,200	100	3,100	-	-	-	-
	시비	1,600	-	1,600	-	-	-	-
	구비	1,600	100	1,500	-	-	-	-
을왕리 해수욕장	소계	1,900	1,900	-	-	-	-	-
	시비	0	-	-	-	-	-	-
	구비	1,900	1,900	-	-	-	-	-

□ 연도별 추진계획

기간	추진계획	목표 이행률
2022년 상반기	• 중촌경로당 진입도로 개설공사 실시계획(변경)인가 신청 • 중촌교차로~백운로 도로개설공사 실시계획인가 • 전소교~하늘도시(송산) 간 도로개설공사 실시설계 착수 • 마당개 진입도로 개설공사 실시설계 착수	10%
2022년 하반기	• 영종 미개발지역 소1-4호선(2차) 도로개설공사 준공 • 잔다리~영종역 입구 간 도로개설공사 준공 • 중촌경로당 진입도로 개설공사 준공 • 하늘어린이집 진입도로 개설공사 준공 • 중촌교차로~백운로 도로개설공사 실시계획(변경)인가, 보상 시행 • 전소교~하늘도시(송산) 간 도로개설공사 실시계획인가 • 마당개 진입도로 개설공사 실시계획인가 • 무의도 관광기반시설(도로)조성사업 보상 시행 • 덕교동 진입도로 개설공사 실시계획인가 • 왕산해수욕장 해변도로 실시계획인가	20%
2023년	• 중촌교차로~백운로 도로개설공사 착 · 준공 • 전소교~하늘도시(송산) 간 도로개설공사 보상 시행 • 마당개 진입도로 개설공사 보상 시행 • 무의도 관광기반시설(도로)조성사업 착 · 준공 • 용유로~마시안해변 간 도로개설공사 착 · 준공 • 덕교동 진입도로 개설공사 착 · 준공 • 왕산해수욕장 해변도로 착 · 준공	40%
2024년	• 전소교~하늘도시(송산) 간 도로개설공사 착 · 준공 • 마당개 진입도로 개설공사 착 · 준공	60%
2025년 ~2026년	• 영종·용유지역 생활기반시설(도로) 확충 지속 시행	100%

□ 타기관과의 협조사항

❍ 도로개설 사업비 연도별 시비 지원 필요.

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 기대효과

❍ 영종국제도시 內 미집행도로를 개설하여 교통환경 개선

❍ 상·하수도 설치 등 기반시설을 확충하여 구민 삶의 질 향상에 기여