12-5		영종·용유지역 생활기반시설 확충 (어항개발사업 및 어항시설)

구분	달성기간	사업주체	예산구분	총예산액 (백만원)
계속	임기내	자체	예산	27,134

주관부서 (협조부서)	해양수산과	부서장 김경은(8900)	담 당 김종달(8836) 고안식(8831)	담당자 김덕기(8837) 박정우(8833)

□ 공약목표

❍ 영종·용유 지역 선착장 정비 등 생활기반시설 확충

□ 개    요

❍ 추진기간 : 2022. 7월 ~ 2026. 6월

❍ 소요예산 : 27,134백만원

❍ 재원조달방안 : 국비 4,704 / 시비 14,054 / 구비 8,376

❍ 주요내용

사업명	사업량	사업비 (백만원)	추진기간	비고
잠진도 어촌정주어항 [잠진항] 개발사업	- 외곽시설 240m, 호안 157m - 육상구역 9,643㎡, 부잔교 2개소	14,000	2015.12~2026.12
소무의항 물량장 보강공사	- 지반개량공법 C.G.S 공법 : 천공 299m, 주입 347㎥ 락네일링 공법 : 천공 및 그라우팅 518m	600	2021.1~2022.7
광명항 물량장 조성사업	공유수면매립 : 4,000㎡,	4,500	2022.1~2023.12
대무의항 선착장 부잔교 교체공사	부잔교 교체(10m*10m)	300	2023.1~2023.12
광명항 선착장 도교 교체공사	도교 교체(L=20m)	100	2024.1~2024.12
예단포항 선착장 확장공사	선착장 확장(L=166m,B=2m)	1,000	2025.1~2026.12
어항 및 소규모항 수시 정비	수시 정비	1,000	2022.1~2026.12
어촌뉴딜300사업 (삼목항,덕교항)	부잔교 신설 및 연장(L=30m) 선착창 확장(L=58m,B=6m)	6,721	2021.1~2024.12

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
계	27,134	6,338	12,028	7,578	595	595
국비	4,704	1,568	1,568	1,568	0	0
시비	14,054	3,894	7,020	2,570	285	285
구비	8,376	876	3,440	3,440	310	310
기타	-	-	-	-	-	-

□ 연도별 추진계획

기간	추진계획	목표 이행률
2022년 하반기	• 잠진도 어촌정주어항(잠진항) 개발사업 - 기본 및 실시설계용역, 공유수면매립 기본계획 반영 절차 이행 • 광명항 물량장 조성사업 기본 및 실시설계용역 • 어촌뉴딜300사업(삼목항, 덕교항) 추진	30%
2023년 상반기	• 잠진도 어촌정주어항(잠진항) 개발사업 - 기본 및 실시설계용역, 환경영향평가 등 행정 절차 이행 • 광명항 물량장 조성사업 기본 및 실시설계 용역 추진 • 대무의항 부잔교 교체공사 실시설계 및 행정 절차 이행 • 어촌뉴딜300사업(삼목항, 덕교항) 추진	40%
2023년 하반기	• 잠진도 어촌정주어항(잠진항) 개발사업 공사 착공 • 광명항 물량장 조성사업 공사 착공 • 대무의항 부잔교 교체공사 착·준공 • 어촌뉴딜300사업(삼목항, 덕교항) 추진	50%
2024년 상반기	• 잠진도 어촌정주어항(잠진항) 개발사업 공사 추진 • 광명항 물량장 조성사업 추진 • 광명항 선착장 도교 교체공사 착·준공 • 어촌뉴딜300사업(삼목항, 덕교항) 추진	60%
2024년 하반기	• 잠진도 어촌정주어항(잠진항) 개발사업 공사 추진 • 광명항 물량장 조성사업 공사 준공 • 어촌뉴딜300사업(삼목항, 덕교항) 추진	70%
2025년 상반기	• 잠진도 어촌정주어항(잠진항) 개발사업 공사 추진 • 예단포항 선착장 확장공사 기본 및 실시설계 용역 주진 • 어촌뉴딜300사업(삼목항, 덕교항) 추진	80%
2025년 하반기	• 잠진도 어촌정주어항(잠진항) 개발사업 공사 추진 • 예단포항 선착장 확장공사 공사 착공 • 어촌뉴딜300사업(삼목항, 덕교항) 추진	90%
2026년 상반기	• 잠진도 어촌정주어항(잠진항) 개발사업 공사 추진 • 예단포항 선착장 확장공사 공사 준공 • 어촌뉴딜300사업(삼목항, 덕교항) 추진	100%

□ 타기관과의 협조사항

❍ 해양수산부 및 인천시(수산과) 예산 지원

❍ 공유수면 매립을 수반하는 사업일 경우 해양수산부의 공유수면매립 기본계획 반영 필요

□ 문제점 및 대책

❍ 잠진도 어촌정주어항(잠진항) 개발사업 관련 공유수면매립 기본계획 미반영에 따른 후속 행정절차 이행 지연

→ 2022년 9월 공유수면매립 기본계획 반영 재요청

□ 기대효과

❍ 어항기능시설 및 편의시설 확충을 통한 수산업 경쟁력 강화 및 관광객 편의 증진

❍ 어항기본시설 정비를 통한 어업활동 개선 및 안전사고 예방