26		인천항 화물차 우회도로 개설

구분	달성기간	사업주체	예산구분	총예산액 (백만원)
신규	임기외	시	예산	미정

주관부서 (협조부서)	건설과	부서장 박노섭(7039)	담 당 이규철(7451)	담당자 정승협(7452)

□ 공약목표

❍ 인천항 주변 여건변화로 인한 교통량 증가로 교통혼잡을 해소하고 주민불편 및 주거환경개선

□ 개    요

❍ 추진기간 : 2022년 ~ 2030년

❍ 소요예산 : 미정(500억 이상)

❍ 주요내용 : 인천항 화물차 우회도로 건설(시행처 : 인천항만공사)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
계
국비
시비
구비
기타

□ 연도별 추진계획

기간	추진계획	목표 이행률
2022년 하반기	• 중구지역 교통환경 개선을 위한 교통량 조사 및 개선방안 수립 용역 추진(市 도로과) • 남항우회도로 건설사업 항만기본계획 반영(인천항만공사)	10%
2023년	• 화물자동차 전용차로, 전용도로, 우선도로 등 관련기관 협의 (市 물류정책과) • 남항우회도로 건설사업 예비타당성 조사(인천항만공사)	30%
2024년	• 남항우회도로 건설사업 기본 및 실시설계(인천항만공사)	50%
2025년	• 남항우회도로 건설사업 기본 및 실시설계(인천항만공사)	70%
2026년	• 남항우회도로 건설공사 착공(인천항만공사)	100%

□ 타기관과의 협조사항

❍ 중구 지역 교통환경 개선을 위한 교통량 조사 및 개선방안 수립 용역 조속 추진 필요(市 도로과)

❍ 화물자동차 전용차로, 전용도로, 우선도로 등 화물자동차 도로의 종합적인 검토가 필요(市 물류정책과)

❍ 남항우회도로 건설사업의 조속한 추진(인천항만공사)

□ 문제점 및 대책

❍ 화물자동차 도로의 종합적인 검토와 우회도로의 적극적인 건설의 필요성에 대하여 인천시에 적극 건의

□ 기대효과

❍ 인천항 화물차 우회도로를 통하여 소음과 분진 등 교통환경 개선