31		원도심 내 주차장 조성

구분	달성기간	사업주체	예산구분	총예산액 (백만원)
계속	임기내	자체	예산	11,247

주관부서 (협조부서)	교통운수과	부서장 최효진(7043)	담 당 이순자(7561)	담당자 오종섭(7577)

□ 공약목표

❍ 원도심 내 공영주차장 조성을 통한 원도심 주차난 해소 및 교통질서 확립

□ 개    요

구 분	사업개요	추진사항	추진계획	비고
유동21-1번지 일원 공영주차장 조성사업	○ 기간 : ‘20.1.~‘22.12. ○ 위치 : 유동 21-1번지 일원 ○ 규모 - 주차장 조성(35면), 1,067.9㎡ ○ 예산 : 4,218백만원 - 國 1,749, 市 750, 區 1,719 ※ 시비(특별조정교부금)	○ 2020. 3. 30. : 도시관리계획 결정 고시 ○ 2020. 8. 18. : 실시계획인가고시 ○ 2021. 11. 29. : 보상계획 공고 ○ 현재 보상협의 중	○ 2023. 상반기 : 공사 착공 ○ 2023. 하반기 : 공사 준공
내동 주거지역 공영주차장 조성사업	○ 기간 : ‘22.7.~‘23.12. ○ 위치 : 내동 2-28번지 일원 ○ 규모 - 주차장 조성(19면), 574.3㎡ ○ 예산 : 1,430백만원 - 市 715, 區 715	○ 2021. 1. 28. : 주차장 조성 민원 접수 ○ 2021. 9. 2. : 시비보조사업 신청 ○ 2022. 4. 28. : 시비보조금 교부 ○ 현재 토지소유자 매각의사 확인 중	○ 2022. 하반기 : 도시관리계획 결정 등 ○ 2023. 상반기 : 보상협의 ○ 2023. 하반기 : 공사준공
신포동 공영주차장 조성사업	○ 기간 : ‘20.1.~‘24.12. ○ 위치 : 항동4가 7번지 일원 ○ 규모 : - 주차장 조성(약120면), 2,167㎡ ○ 예산 : 5,599백만원 - 國 2,799, 市 2,800	○ 2022. 5. 6. : 사업계획 변경 승인요청 (市→국토교통부) ○ 2022. 5. 10. : 사업계획 변경 승인 (국토교통부→市) ○ 2022. 6. 13. : 공공건축 기획심의용역 착수	○ 2023. 상반기 : 실시설계 용역 준공 ○ 2023. 하반기 : 공사착공	재배정

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		계	2020	2021	2022	2023	2024	2025이후
합계	국비	4,548	-	2,799	1,749	-	-	-
	시비	4,265	1,000	-	715	2,550	-	-
	구비	2,434	47	-	2,387	-	-	-
	소계	11,247	1,047	2,799	4,851	2,550	-	-
유동	국비	1,749	-	-	1,749	-	-	-
	시비	750	750	-	-	-	-	-
	구비	1,719	47	-	1,672	-	-	-
	소 계	4,218	797	-	3,421	-	-	-
내 동	시비	715	-	-	715	-	-	-
	구비	715	-	-	715	-	-	-
	소 계	1,430	-	-	1,430	-	-	-
신포동 (재배정)	국비	2,799	-	2,799	-	-	-	-
	시비	2,800	250	-	-	2,550	-	-
	소계	5,599	250	2,799	-	2,550	-	-

□ 기대효과

❍ 주거지역과 상업지역이 혼재되어 있는 원도심의 주차난을 해소하고 교통질서를 확립.

❍ 불법 주정차를 해소하고 교통안전사고를 예방

❍ 인천↔서울간 이동하는 시민들의 교통 편의 증진