5-1		원도심 도시재생 및 활성화 사업 (신흥·답동 공감마을 도시재생 뉴딜사업)

구분	달성기간	사업주체	예산구분	총예산액 (백만원)
계속	임기내	자체	예산	17,600백만원

주관부서 (협조부서)	도시항만개발과	부서장 최정현(7042)	담 당 김기호(7656)	담당자 윤자영(6975) 김석환(6976) 임재윤(7659)

□ 공약목표

❍ 원도심 도시재생 및 활성화 사업 추진으로 마을의 경제적·사회적·     문화적 활력 회복

□ 개    요

❍ 기    간 : 2019년 ~ 2025년

❍ 위   치 :　신흥동1가 38-9번지 일원 (87,037㎡)

❍ 소요예산 : 17,600백만원

❍ 재원조달방안 : 국시비 보조사업

❍ 주요내용

- 주민공동이용시설 조성, 오감거리 조성사업, 주차장조성 등

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026
계	17,600	9,514	3,000	2,800	2,286	-	-
국비	8,800	4,775	1,500	1,400	1,125	-	-
시비	4,400	2,369	750	700	581	-	-
구비	4,400	2,370	750	700	580	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-

□ 연도별 추진계획

기간	추진계획	목표 이행률
2022년 하반기	• 신흥동 오감거리 조성사업(토목) 착공 • 2022년 집수리 지원공사 실시설계 용역 준공 • 2022년 집수리 지원공사 완료 • 공공청사 복합개발 사업부지 지장물 철거 완료 및 착공식 • 도시재생활성화 변경계획 승인 요청 • 마을관리협동조합 설립 및 육성 용역 준공 • 도시재생대학 운영 • 주민공모사업 시행	80%
2023년	• 2023년 집수리 지원공사 시행 • 답동 오감거리 조성사업(토목) 시행 • 마을관리협동조합 사업화모델 운영 • 주민공모사업 시행	85%
2024년	• 2024년 집수리 지원공사 시행	90%
2025년	• 공공청사 복합개발사업 준공 및 사업완료	100%

□ 타기관과의 협조사항

❍ 국토교통부 : 활성화계획 변경 협의

- 경미한 변경(2022년), 중대한 변경(2023년)

❍ 한국토지주택공사(LH) : 공공청사복합개발사업 공사 추진 협의

❍ 한국전력공사 : 지중화사업 단계별 추진 협의

□ 문제점 및 대책

❍ 공공청사 사업지 보상, 오감거리 지중화사업 지연으로 인한 사업기간 연장될 수 있음

□ 기대효과

❍ 원도심의 노후한 기반시설을 정비·확충하여 주거환경 재생기반 마련  ❍ 공공청사, 행복주택을 복합 건립을 통해 공공서비스의 질을 높이고      젊은층의 주거 안정을 도모하여 원도심 활성화 기여

❍ 주민역량 강화 및 참여 활동을 통한 마을공동체 활성화