79		경로당 신축 및 환경개선

구분	달성기간	사업주체	예산구분	총예산액 (백만원)
계속	임기내	자체	예산	2,955

주관부서 (협조부서)	어르신장애인과	부서장 유동숙(7046)	담 당 최길례(7021)	담당자 백연지(7023)

□ 공약목표

❍ 경로당 시설 보강 및 확충을 통한 어르신복지 혜택 강화

□ 개    요

❍ 추진기간 : 2022. 하반기 ~ 2026. 6. 30.

❍ 소요예산 : 2,955백만원

❍ 재원조달방안 : 구비

❍ 주요내용 : 지역별 인구현황, 여건 등을 고려하여 경로당 리모델링 및                 신축, 이전 추진

- 경로당 리모델링 공사 : 10개소

(중앙동, 연안동, 내경동, 송월동, 영종동, 금산, 석화, 남북, 덕교, 포내)

- 경로당 이전 및 신축 검토 : 2개소

(을왕4통, 신설마을 경로당)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022	2023	2024
계	2,955	655	1,100	1,200
시비	300	300	-	-
구비	2,655	355	1,100	1,200

□ 연도별 추진계획

기간	추진계획	목표 이행률(%)
2022년	• 경로당 리모델링 공사(5개소) 설계용역 준공 • 덕교 경로당 리모델링 공사 준공 • 연안동 경로당 리모델링 공사 준공 • 중앙동 경로당 리모델링 공사 준공 • 금산 경로당 리모델링 공사 준공 • 을왕4통 경로당 이전 부지 검토 및 확정	30
2023년 상반기	• 남북 경로당 리모델링 공사 준공 • 석화 경로당 리모델링 공사 준공 • 경로당 리모델링 공사(1개소/포내경로당) 설계용역 • 신설마을 경로당 신축부지 확정	50
2023년 하반기	• 을왕4통 경로당 이전 시행 • 영종동 경로당 리모델링 공사 준공 • 포내 경로당 리모델링 공사 준공 • 신설마을 경로당 신축공사 실시 설계	80
2024년	• 송월동 경로당 리모델링 공사 준공 • 내경동 경로당 리모델링 공사 준공 • 신설마을 경로당 신축공사 시행	100

□ 문제점 및 대책

❍ 경로당 신축은 신축 부지 확보의 어려움과 많은 예산이 소요되는

사업으로 구의 재정여건 등에 따라 장기적 검토가 필요

❍ 을왕4통 경로당은 임대가 가능한 건물을 신속히 물색하여 장기임대로

이전하고 신설마을 경로당은 관리하고 있는 구유지 內에 신축하는

방안으로 추진하고자 함.

□ 기대효과

❍ 노인여가복지시설 확충 및 환경개선을 통한 어르신복지 향상에 기여