87		백운산, 월미산 체계적 관리

구분	달성기간	사업주체	예산구분	총예산액 (백만원)
계속	임기내	자체	예산	1,310

주관부서 (협조부서)	도시공원과	부서장 최성현(7788)	담 당 박영호(7771)	담당자 강원(7774)

□ 공약목표

❍ 백운산 내 산림 치유공간 조성 및 연차별 등산로 개선사업 추진을 통한 효율적 관리

□ 개    요

❍ 추진기간 : 2022. 7월 ~ 2025. 12월

❍ 소요예산 : 1,310백만원

❍ 재원조달방안 : 국비 140 / 시비 290 / 구비 880

❍ 주요내용

- 백운산 산림 치유공간 조성사업

·휴양시설 및 힐링공간 마련

·산림치유지도사 고용을 통한 산림치유 프로그램 운영

- 백운산 등산로 개선사업

·연차별 등산로 시설정비 및 숲가꾸기 추진

·등산로 주변 운동시설 및 휴식공간 확충

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
계	1,310	110	400	400	400	0
국비	140	20	40	40	40
시비	290	50	80	80	80
구비	880	40	280	280	280
기타	-	-	-	-	-	-

□ 연도별 추진계획

기간	추진계획	목표 이행률
2022년 하반기	• 등산로 정비 및 백운산 등산가이드북 제작 완료	10%
2023년	• 백운산 산림휴양시설 조성 및 개선을 위한 기본설계 • 백운산 등산로 정비 시행, 등산로 주변 숲가꾸기 추진	40%
2024년	• 백운산 산림휴양시설 조성 및 개선사업 실시계획 • 백운산 산림휴양시설 조성, 등산로 개선사업 추진 • 산림치유지도사 고용 및 프로그램 운영	70%
2025년	• 백운산 산림휴양시설 및 등산로 유지보수 추진 • 산림치유지도사 고용 및 프로그램 운영	100%

□ 타기관과의 협조사항

❍ 월미산(공원)은 관리기관인 시 월미공원사업소와의 적극적인 소통을 통해 주민요청사항 등 사업현안이 반영되도록 면밀히 추진

□ 문제점 및 대책

❍ 도시자연공원구역 지정 등 행위 제한으로 토지소유자 동의가 어려움

- 국·공유지내 대상지 확보 및 협의후 사업 추진

□ 기대효과

❍ 백운산의 체계적 관리를 통한 산림치유공간 조성 및 활성화 도모