89		해양쓰레기 통합관리센터 구축

구분	달성기간	사업주체	예산구분	총예산액 (백만원)
신규	임기내	자체	예산	5,488

주관부서 (협조부서)	해양수산과	부서장 김경은(8900)	담 당 고안식(8831)	담당자 김미주(8833)

□ 공약목표

❍ 해양쓰레기 수거·처리의 효율적 운영을 위한 체계적 통합관리센터 건립

□ 개    요

❍ 추진기간 : 2023년 ~ 2025년

❍ 소요예산 : 5,488백만원(국비 1,560 / 시비 2,396 / 구비 1,532)

❍ 재원조달방안 : 2,000백만원(시비 50%, 구비 50%) - 센터 건립 예산

❍ 주요내용

- 폐스티로폼 감용처리장 운영, 해양쓰레기 집하장 운영, 바다환경지킴이       (기간제 근로자) 인력 운영, 해양쓰레기 수거․처리 용역, 하천하구쓰레기       정화사업, 해양쓰레기 봉사단체 지원 등

- 상시 근무인력 4인이 센터 운영

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
계	5,488	872	1,372	1,872	1,372	-	-
국비	1,560	390	390	390	390	-	-
시비	2,396	349	599	849	599	-	-
구비	1,532	133	383	633	383	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-

□ 연도별 추진계획

기간	추진계획	목표 이행률
2023년 상반기	• 해양쓰레기 통합관리센터 부지 확보	10%
2023년 하반기	• 해양쓰레기 통합관리센터 기본 및 실시설계	30%
2024년 상·하반기	• 해양쓰레기 통합관리센터 공사 발주	90%
2025년 상반기	• 준공 및 센터 개소	100%

□ 타기관과의 협조사항

❍ 인천시 필요 재원 협조 요구

□ 문제점 및 대책

❍ 센터 건립의 타당성 검토 및 부지 확보 우선

□ 기대효과

❍ 해양쓰레기 수거․처리의 체계적인 관리를 통한 해양환경 개선

❍ 해양환경에 대한 관심 증가에 따른 신속한 대응 가능