9		동 행정복지센터 청사 확충

구분	달성기간	사업주체	예산구분	총예산액 (백만원)
신규	임기내	자체	예산	31,658

주관부서 (협조부서)	총무과	부서장 김동철(7032)	담 당 이미현(7161)	담당자 양이승(7162)

□ 공약목표

❍ 동 행정복지센터 청사 신축을 위한 부지 확보

❍ 청사 신축 재원 확보 및 행정절차 등 이행

❍ 청사 신축 실시설계, 공사 착공 및 준공

□ 개    요

❍ 기    간 : 연차별 신축 추진

❍ 재원조달방안 : 자체재원

❍ 주요내용

- 동 행정복지센터 신축을 위한 부지확보 및 행정절차 이행

- 청사 신축 관련 실시설계, 공사 착공 및 준공 등

(단위 : 백만원)

연번	해 당 동	사업기간	장 소	예상사업비
1	신포동	2023년 ~ 2026년	미정	10,000
2	도원․율목동	2023년 ~ 2026년	미정	10,000
3	신흥동	2019년 ~ 2024년	인중로108번길 30-32	11,658

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
계	31,658	1,658	5,000	7,000	9,000	9,000
국비
시비
구비	31,658	1,658	5,000	7,000	9,000	9,000
기타

※전액 구비사업으로 계획하고 있으나 특별교부금 등 시비확보 노력

□ 연도별 추진계획

기간	추진계획	목표 이행률
2022년 하반기	• 신포동 청사 신축 부지 검토 및 선정 등 • 도원․율목동 통합청사 신축 중기지방재정계획(2023년 ~ 2027년) 반영 • 도원․율목동 통합 관련 연구용역(여론조사) 실시 • 신흥동 청사 신축 공사 착공	10%
2023년 상반기	• 신포동 청사 신축 관련 도시관리계획시설 결정 등 행정절차 이행 • 도원․율목동 통합 기본계획 수립 및 주민의견 수렴	30%
2023년 하반기	• 도원․율목동 통합 관련 행정구역 조정(안) 확정 • 도원․율목동 통합청사 신축 부지 검토 및 선정 등 • 신포동 청사, 도원․율목동 통합청사 신축 지방재정투자심사	50%
2024년 상반기	• 신포동 청사, 도원․율목동 통합청사 신축 공공건축심의위원회 심의 • 신포동 청사, 도원․율목동 통합청사 신축 설계공모	60%
2024년 하반기	• 신포동 청사, 도원․율목동 통합청사 신축 실시설계 • 신흥동 청사 신축 공사 준공	70%
2025년 상반기	• 신포동 청사, 도원․율목동 통합청사 신축 공사 착공	80%
2026년 하반기	• 신포동 청사, 도원․율목동 통합청사 신축 공사 준공 • 도원․율목동 통합 관련 조례 개정 및 공포	100%

□ 문제점 및 대책

❍ 원도심의 특성상 동청사 신축을 위한 적정부지 확보 어려움

❍ 토지 또는 건물 매입 등 청사부지 확보를 위한 재원 확보 필요

❍ 청사 신축 부지 검토 및 선정에 따라 행정절차 이행 기간의 변동성으로 인해 부지 선정 후 추진계획 수립 필요

□ 기대효과

❍ 문화․복지․커뮤니티 공간 확보를 통해 적정 규모의 동 청사 신축으로 주민 만족도 제고

❍ 주민복지 서비스 질 향상 및 지역공동체 형성의 역할 강화를 위한 洞 행정복지센터 內 주민자치센터 공간 확보