91		영종하늘도시 자동집하시설(크린넷) 운영

구분	달성기간	사업주체	예산구분	총예산액 (백만원)
신규	임기내	시	비예산	-

주관부서 (협조부서)	환경보호과	부서장 강병천(7045)	담 당 이형국(7411)	담당자 정국현(7412)

□ 공약목표

❍ 영종하늘도시 개발사업에 따라 사업주체(인천시 경제청-LH)가 설치하여 장기간 방치된 자동집하시설(크린넷)의 운영 정상화

□ 시설개요

❍ 시설규모 : 집하장 4개소, 관로 70.4km

- 단일관로, 음식물 자동포장 시스템

- 투입시설 2,400개소 (사업자 652개소, 분양자 1,748개소)

❍ 공사금액 : 1,489억원 (일괄입찰방식)

❍ 시 행 자 : 한국토지주택공사(LH), 인천도시공사(IH)

❍ 도 급 사 : GS건설 외 3개사(GS건설, 두산건설, 한신공영, 진흥기업)

❍ 공사기간 : 2010. 4. 26. ~ 2019. 12. 31.(단계별 시행) * 현재 미준공

- (1단계) 시설물공사 : 2010. 4. 26. ~ 2014. 12. 31. (시설공사완료)

- (2단계) 유지관리 및 투입구 공사 : 2015. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.

□ 연도별 추진계획

기간	추진계획	목표 이행률
2022년 하반기	• 영종하늘도시 자동집하시설 운영을 위한 TF 구성(LH-경제청-중구) • 시설진단 및 보수계획 수립(LH)	30%
2023년 상반기	• 시설 보수(18개월) 및 시운전(3개월) 실시(LH)	60%
2025년 상반기	• 시운전 완료 후 정상가동을 위한 의무운전 실시(LH-경제청) • 시설 운영 비용 및 필요 인력 산정 등을 위한 용역 실시(경제청-중구) • 시설물 보완 및 집하장별 단계적 인수·인계 협의(경제청-중구)	100%

□ 타 기관과의 협조사항

❍ 영종하늘도시 자동집하시설은 2006. 8. 16. 영종하늘도시 개발계획변경 및 실시계획 승인 협의 時 인천시 경제청이 사업시행자인 LH에 반영을 요청하여 설치된 시설로서, 2014. 12. 31. 시설물 공사완료 후 현재 미준공 상태로 방치됨

❍ 자동집하시설은 생활폐기물 수집·운반 처리를 위한 폐기물 처리시설이 아닌 일부 지역주민의 배출 편의를 위한 주민 편의시설로서 우리 구에서 반드시 운영해야 할 법적 책임(사무)이 없으나, 인천시 경제청과 운영의 정상화를 위해 적극 협의를 추진할 예정

※ 자동집하시설 운영 협의 절차

종합진단 용역 및 보수계획 수립	→	보수공사 및 시험운전(3개월)	→	준공	→	의무(상업)운전 (1년)	→	운영 협의
(경제청, LH)		(경제청, LH)		(경제청)		(경제청, LH)		(경제청, 중구)

⇒ 입주율에 따라 집하장별 단계적 운영 협의(입주율 70% 이상 시)

□ 문제점 및 대책

❍ 관로 및 부속시설 노후화에 따른 시설 정상가동여부 불확실

⇒ 시설종합진단 및 보수공사 실시, 시운전 등 준공 절차 이행 요구(LH-경제청)

❍ 시설운영에 따른 악취 등 시설개선 민원 발생

⇒ 준공 후 의무운전(1년 이상) 실시 및 시설개선 조치 요구(LH-경제청)

❍ 단일관로에 따른 일반/음식물류 폐기물 혼합수거 방식으로, 환경부 정책에 상반되어, 혼입방지 대책 필요

⇒ 음식물류 폐기물 운영 제외를 위한 사전 주민 동의 절차 이행 요구(LH-경제청)

□ 기대효과

❍ 자동집하시설 운영 정상화를 통해 영종하늘도시 주민불편을 해소하고, 정상적인 시설 상태를 전제로 운영을 협의하여 區 재정부담 최소화